RAFAEL IMPULCETTO
Engº Civil. CREA 5062630966
SAECIL

Obra : CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE 3.000 m3 - SAECIL
Local : Via Anhanguera, Km 192,8 - Leme - SP.

Folha: 01
Data: Agosto/17

Leme, Agosto de 2017

ITEM

DISCRIMINAÇÃO

PRAZO EM DIAS

VALORES
PARCIAIS

%

0	30

60

90

120

1

Serviços Preliminares

27.505,90

2,12

27.505,90

2

Terraplenagem da Área

68.339,67

5,27

51.254,75

17.084,92

3

Preparo do Fundo

31.170,66

2,40

20.884,34

10.286,32

4

Estrutura

875.132,61

67,38

175.026,52

262.539,78

262.539,78

175.026,53

5

Impermeabilização

176.709,62

13,64

176.709,62

6

Esquadrias

4.184,64

0,33

4.184,64

7

Instalação Hidráulica

3.000,00

0,23

3.000,00

8

Complementos

111.767,26

8,63

111.767,26

9

Total

274.671,51

275.826,10

279.624,70

467.688,05

100,0

1.297.810,36

10

Total Acumulado

550.497,61

830.122,31

1.297.810,36

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

               ANEXO VI